от 29.11.2017 № 17/2017	от 01.12.2016 № 18/2016	

		

Об утверждении инвестиционной программы МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Небугского сельского поселения на период 2018-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ          «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения правления региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края   п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить инвестиционную программу МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» «Развитие, реконструкция и модернизация системы водоснабжения Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2018-2020 годы» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Небугского сельского поселения со сроком реализации с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года в соответствии с приложением.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Руководитель                                                                                  С.Н. Милованов

ПРИЛОЖЕНИЕ
приказу региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края
от 29.11.2017 № 17/2017

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
 МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» «Развитие, реконструкция и модернизация систем водоснабжения и водоотведения Небугского сельского поселения Туапсинского района на 2018-2020 годы»

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа: Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения».
Местонахождение регулируемой организации: Центральная ул., 7,                с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831.
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы: директор Синчило Сергей Кузьмич, телефон (86167) 98-353, 98-356.
Период реализации инвестиционной программы: 2018-2020 годы.
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: региональная энергетическая комиссия – департамент цен и тарифов Краснодарского края.
Местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу: Красная ул., 22, г. Краснодар, Краснодарский край, 350063, телефон (861) 255-14-20, факс: (861) 262-04-46.
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: администрация Небугского сельского поселения Туапсинского района, глава – Ачох Рашид Колобатович.
Местонахождение органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу: Газовиков ул., 6, с. Небуг, Туапсинский район, Краснодарский край, 352831, тел./факс: (86167) 98-5-25.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Наименование показателя	Плановые значения показателей на каждый год срока действия программы	
	2018	2019	2020	
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения	
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам   производственного контроля качества питьевой воды, %	0,7	0,7	0,7	
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,4	0,4	0,4	
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	0,9	0,9	0,8	
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, % 	26,22	26,22	26,22	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3*	1,41	1,41	1,41	
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения	
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % 	0	0	0	
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения (в процентах)	8,3	8,3	8,3	
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км 	3,6	3,6	3,5	
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3*	1,017	1,017	1,017	
*показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды; очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.
Основанием для разработки инвестиционной программы (далее – ИП) МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» является техническое задание на разработку ИП, утвержденное постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 24.04.2017 № 140, схема водоснабжения Небугского сельского поселения Туапсинского района, утвержденная постановлением администрации Небугского сельского поселения Туапсинского района от 19.03.2015 № 48.
ИП сформирована с учетом программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на основании результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения Небугского городского поселения Туапсинского района согласно требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, обоснование их необходимости, размеров расходов на реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.
Согласно инвестиционной программе планируется подключение новых потребителей к системе водоснабжения и водоотведения. Перечень подключаемых объектов в период реализации ИП представлен в таблице 1. Перечень мероприятий ИП по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения приведен в таблице 2 и сформирован таким образом, чтобы они обеспечивали достижение целевых индикаторов, исходя из существующих проблем и особенностей эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры.
Условные обозначения ИП: L – длина, Ø – диаметр условный, ЗУ – земельный участок; ИЖС - индивидуальное жилищное строительство.
Перечень подключаемых абонентов в период реализации инвестиционной программы
Таблица 1
№ п/п	Год подключения	Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты технических условий (при наличии)	Вид подключаемой услуги (холодное водоснабжение- ХВС, водоотведение -ВО)	Подключаемая нагрузка, м3/сут.	Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя	
1	2	3	4	5	6	
Холодное водоснабжение	
1	2018	ЗУ для размещения ресторанов, кафе, столовых, баров; для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств машин в с. Небуг	ХВС	                                                                                                                                        10	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Набережная, Ø -150 мм, L – 620 м	
2	2018	ЗУ для ИЖС, ул. Магнолий, 2, с. Агой	ХВС	0,5		
3	2018	ЗУ для ИЖС, ул. Центральная, 8, с. Агой	ХВС	0,5		
4	2018	ЗУ для строительства двухэтажных гаражных боксов в количестве 11 шт., с. Агой	ХВС	2,5		
5	2018	ЗУ для ИЖС, квартал жилой застройки «Рассвет», 20, с. Агой	ХВС	0,5		
6	2018	ЗУ по ул. Конечной, 24, с. Агой	ХВС	0,5		
7	2018	ЗУ по ул. Конечной, 25, с. Агой	ХВС	0,5		
8	2018	ЗУ по ул. Конечной, 1в, с. Аой	ХВС	0,5		
9	2018	ЗУ по ул. Конечной, 7, с. Агой	ХВС	0,5		
10	2018	ЗУ по ул. Конечной, 13, с. Агой	ХВС	0,5		
11	2018	ЗУ № 13, ул. Радужная, с. Агой	ХВС	0,5		
12	2018	ЗУ № 13А, ул. Радужная, с. Агой	ХВС	0,5		
13	2018	ЗУ № 5А, ул. Конечная, с. Агой	ХВС	0,5		
14	2018	Участок № 147, СНТ «Дорожник», с. Агой	ХВС	0,5		
15	2018	ЗУ № 1, ул. Родниковая, с. Агой	ХВС	0,5		
16	2018	ЗУ № 59а, ул. Центральная, с. Небуг	ХВС	0,5		
17	2018	ЗУ № 4, ул. Спортивная, с. Небуг	ХВС	0,5		
18	2018	ЗУ № 57 «В», ул. Центральная, с. Небуг	ХВС	0,5		
19	2018	ЗУ № 1Б, ул. Совхозная, с. Небуг	ХВС	0,5		
20	2018	ЗУ № 55А, ул. Центральная, с. Небуг	ХВС	0,5		
21	2018	ЗУ в западной части с. Небуг, слева от автомобильной дороги М-27 «Джубга-Сочи»	ХВС	1,2		
22	2018	ЗУ для размещения гаражей с помещениями вспомогательного использования, ул. Центральная, 11А, с. Небуг	ХВС	9,6		
23	2018	ЗУ № 1, ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,5		
24	2018	ЗУ № 20, микрорайон «Веста», с. Агой	ХВС	0,5		
25	2018	ЗУ № 48-3, ул. Центральная, с. Агой	ХВС	0,5		
26	2018	ЗУ № 18 ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,5		
27	2018	ЗУ № 19 ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,5		
28	2018	ЗУ № 112, с/т «Дорожник», с. Агой	ХВС	0,5		
29	2018	ЗУ для ведения личного подсобного хозяйства, ул. Горная, с. Агой	ХВС	0,72		
30	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0907001:0435 для ИЖС, ул. Родниковая, 6, с. Агой	ХВС	0,72		
31	2018	Жилой дом, ул. Набережная, 7а с. Небуг	ХВС	3,6		
32	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0108003:163 для размещения гостиниц, гостиничных комплексов в пос. Тюменском	ХС	23,52		
33	2019	ЗУ, ул. Центральная, 1д, для строительства магазина, с. Небуг	ХВС	0,72		
34	2019	ЗУ, ул. Центральная, 71, с. Небуг	ХВС	0,72		
35	2019	ЗУ для ИЖС, с. Небуг	ХВС	0,72		
36	2019	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0109001:863, с. Небуг	ХВС	0,72		
37	2019	Гараж (бос № 16), ул. Газовиков, 2в	ХВС	0,72		
38	2019	Гараж (бокс № 19), ул. Газовиков, дом № 2в, с. Небуг	ХВС	0,72		
39	2019	ЗУ, ул. Приморская, 1/3а, с. Небуг	ХВС	0,72		
40	2019	Объект незавершенного строительства жилой дом с кафе на 40 посадочных мест, ул. Новороссийское шоссе, дом № 15, с. Небуг	ХВС	6,24		
41	2019	Жилой дом, ул. Приморская, 9, с. Небуг	ХВС	0,72		
42	2019	ЗУ № 9, микрорайон «Веста», с. Агой	ХВС	0,72		
43	2019	ЗУ № 4, ул. Родниковая, с. Агой	ХВС	0,72		
44	2019	ЗУ № 52Б, ул. Центральная, с. Агой	ХВС	0,72		
45	2020	Объект незавершенного строительства - гостиничный комплекс на 350 мест в с. Агой, б/о «Радуга», участок № 5, с. Агой	ХВС	1,92		
46	2020	ЗУ № 4А для ИЖС, квартал жилой застройки «Рассвет», с. Агой	ХВС	1,2		
47	2020	ЗУ с кадастровым номером 23:3:0907002:174 в с. Агой	ХВС	0,72		
48	2018	ЗУ для ИЖС, квартал жилой застройки «Рассвет», № 26, с. Агой	ХВС	0,5	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100, L – 286 м
	
49	2018	ЗУ № 3, ул. Виноградная, с. Агой	ХВС	0,5		
50	2018	ЗУ для ИЖС, ул. Центральная, 25Г, с. Агой	ХВС	0,5		
51	2018	ЗУ для ИЖС, квартал жилой застройки «Рассвет» № 18	ХВС	0,5		
52	2018	Земельный участок, ул. Горная, с. Агой	ХВС	0,5		
53	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0000000:720 в с. Агой	ХВС	0,5		
54	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0907002:195 в с. Агой	ХВС	0,5		
55	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0907002:178 в с. Агой	ХВС	0,5		
56	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0907002:174 в с. Агой	ХВС	0,5		
57	2018	ЗУ для ИЖС, с. Агой	ХВС	0,5		
5	2018	ЗУ № 21, ул. Озерная, с. Агой	ХВС	0,5		
59	2018	ЗУ № 17, ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,5		
60	2018	ЗУ № 17а, ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,5		
61	2018	ЗУ № 17, ул. Роз, с. Агой	ХВС	1		
62	2018	Гаражные боксы ГСК «Рассвет», пос. Тюменский	ХВС	10		
63	2018	ЗУ для ИЖС, пос. Тюменский, 4б	ХВС	0,5		
64	2018	ЗУ для строительства и эксплуатации гостиницы на левом берегу р. Казачка, справа от автодороги Джубга-Сочи и в 40 метрах от нее, пос. Тюменский	ХВС	0,5		
65	2018	ЗУ для размещения домов блокированной и секционной застройки, квартал жилой застройки «Прибой», участок № 3, пос. Тюменский	ХВС	4,5		
66	2018	ЗУ № 40 «В», ул. Набережная, с. Небуг	ХВС	0,5		
67	2018	ЗУ № 7, ул. Набережная, с. Небуг	ХВС	0,5		
68	2018	ЗУ, КЖЗ «Спортивный», с. Небуг	ХВС	70		
69	2018	ЗУ для ИЖС, с. Небуг	ХВС	0,72		
70	2018	ЗУ площадью 601 м2, для ИЖС, с. Агой	ХВС	0,5		
71	2018	ЗУ, ул. Центральная, 50Б, с. Агой	ХВС	0,5		
72	2018	ЗУ, квартал жилой застройки «Рассвет» № 22, с. Агой	ХВС	0,5		
73	2018	ЗУ, ул. Каштановая, 2, с. Агой	ХВС	0,5		
74	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0907002:223, предназначенный для размещения гаражей с помещениями вспомогательного использования, с. Агой	ХВС	0,5		
75	2018	ЗУ № 4в, площадью 700 м2 для ИЖС, пос. Тюменский	ХВС	0,5		
74	2019	ЗУ для ИЖС, восточнее б/о «Радуга», пос. Тюменский	ХВС	0,5		
77	2019	Территория бывшего рыбколхоза «Родина», для строительства коттеджей для отдыха, пос. Тюменский	ХВС	50		
78	2019	Гаражные боксы № 16а, пос. Тюменский	ХВС	1,2		
79	2019	Земельный участок, ул. СМУ-4, 1/2 доя дома№ 4А, с. Небуг	ХВС	0,72		
80	2019	ЗУ № 5а для ИЖС, ул. Новороссийское шоссе, с. Небуг	ХВС	0,72		
81	2019	Дом № 19, кв. 3, ул. Приморская, с. Небуг	ХВС	0,72		
82	2019	ТОС «Олимп», ул. Набережная, с. Небуг	ХВС	0,72		
83	2019	ЗУ № 13г, ул. Совхозная, с. Небу	ХС	0,72		
84	2019	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0109001:1037, ул. Черноморская в районе участка 2Б, с. Небуг	ХВС	0,72		
85	2019	ЗУ, ул. Центральная, 46/3, с. Агой	ХВС	0,72		
86	2019	ЗУ № 41, квартал жилой застройки «Рассвет», с. Агой	ХВС	0,72		
87	2019	ЗУ ля ИЖС, с. Агой	ХВС	0,72		
88	2019	ЗУ для ИЖС, с. Агой	ХВС	0,72		
89	2020	Апарт-отель, ул. Новороссийское шоссе, с. Небуг	ХВС	118		
90	2020	ЗУ № 7 для ИЖС, ул. Радужная, с. Агой	ХВС	0,72		
91	2020	ЗУ № 45, квартал жилой застройки «Рассвет», с. Агой	ХВС	0,72		
92	2020	ЗУ № 25, ул. Каштановая, с. Агой	ХВС	0,72		
93	2020	ЗУ № 10, с кадастровым номером 23:33:0907001:170, ул. Солнечная, с. Агой	ХВС	0,72		
94	2020	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0110001:762, для ИЖС, квартал жилой застройки «Рассвет», № 21а, с. Агой	ХВС	0,72		
95	2020	ЗУ № 93, с/т «Дорожник», с. Агой	ХВС	0,72		
96	2020	ЗУ для ИЖС, ул. Подгорная, № 3, с. Агой	ХВС	3,6		
97	2020	ЗУ № 11 и № 13 ул. Светлая, с. Агой	ХВС	0,72		
Водоотведение	
98	2018	ЗУ для строительства магазина, ул. Центральная, № 1д с. Небу	ВО	0,72	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома № 3, ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325  мм, L – 35 м	
99	2018	Жилой дом № 7а, ул. Набережная, с. Небуг	ВО	3,6		
100	2018	Земельный участок, ул. СМУ-4, 1/2 доля дома № 4А с. Небуг	ВО	0,72		
101	2018	ЗУ № 5а, для ИЖС, ул. Новороссийское шоссе, с. Небуг	ВО	0,72		
102	2018	ТОС «Олимп», ул. Набережная, с. Небуг	ВО	0,72		
103	2018	ЗУ № 13г, ул. Совхозная, с. Небуг	ВО	7,2		
104	2018	Гараж (бокс № 16), ул. Газовиков, дом № 2в	ВО	0,72	Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский, Ø - 200 мм, L – 14 м	
105	2018	Гараж (бокс № 19), ул. Газовиков, дом № 2в, с. Небуг	ВО	0,72		
106	2018	Объект незавершенного строительства – жилой дом с кафе на 40 посадочных мест, ул. Новороссийское шоссе, дом № 15, с. Небуг	ВО	6,24		
107	2018	ЗУ с кадастровым номером 23:33:0108003:163 для размещения гостиниц, гостиничных комплексов в пос. Тюменском	ВО	23,52		
108	2018	ЗУ для размещения ресторанов, кафе, столовых, баров; для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств машин в с. Небуг	ВО	10	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька»: Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м (сталь)	
109	2018	Земельный участок для ИЖС, пос. Тюменский, 4б	ВО	0,5		
110	2018	ЗУ для строительства и эксплуатации гостиницы, на левом берегу р. Казачка, справа от автодороги Джубга-Сочи и в 40 метрах от нее, пос. Тюменский	ВО	0,5		
111	2018	ЗУ для размещения домов блокированной и секционной застройки, квартал жилой застройки «Прибой», участок № 3, пос. Тюменский	ВО	4,5		
112	2018	Гаражные боксы ГСК «Рассвет», пос. Тюменский	ВО	10		
113	2019	ЗУ для ИЖС, с. Небуг ул. Набережная, 10б	ВО	0,72		
114	2019	ЗУ для ИЖС, ул. Набережная, 10В, с. Небуг	ВО	0,72		
115	2019	ЗУ для ИЖС, ул. Набережная, 10Ж	ВО	0,72		
116	2019	Жилое строение, ул. Набережная, 13, кв. 2, с. Небуг	ВО	0,72		
117	2019	ЗУ для ИЖС, ул. Набережная, 10, с. Небуг	ВО	0,72		
118	2019	ЗУ для ИЖС, ул. Набережная, 10Д, с. Небуг	ВО	0,72		
119	2019	Жилое строение, ул. Набережная, 13, кв. 1, с. Небуг	ВО	0,72		
120	2020	Коттеджный поселок «Сосновый» в районе санатория «Сосновый»	ВО	150		
121	2018	Земельный участок, КЖЗ «Спортивный», с. Небуг	ВО	70	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька»: Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м (сталь)	
122	2018	ЗУ в западной части с. Небуг, слева от автомобильной дороги М-27 «Джубга-Сочи»	ВО	1,2		
123	2018	ЗУ для размещения гаражей с помещениями вспомогательного использования, ул. Центральная, 11А, с. Небуг	ВО	9,6		
124	2018	ЗУ № 4в, площадью 700 м2 для ИЖС, пос. Тюменский	ВО	0,5		
125	2019	ЗУ для ИЖС, восточнее б/о «Радуга», пос. Тюменский	ВО	0,5		
126	2019	Территория бывшего рыбколхоза «Родина» для строительства коттеджей для отдыха, пос. Тюменский	ВО	50		
127	2019	Гаражные боксы № 16а, пос. Тюменский	ВО	1,2		
128	2020	Апарт-отель, ул. Новороссийское шоссе, с. Небуг	ВО	118		
Итого водоснабжение, в том числе:	365,12	 

 

 
 	
2018 год	161,58		
2019 год 	73,06		
2020 год 	130,48		
Итого водоотведение, в том числе:	476,42		
2018 год	151,68		
2019 год 	56,74		
2020 год 	268		

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или)
реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Таблица 2
№ п/п	Наименование мероприятия	Характеристика мероприятия, объемные показатели, ед. изм.	Объемные показатели	Ед. изм.	Реализация мероприятий по годам	Технологическое обоснование	
					2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 мм	Замена стальных сетей водоснабжения Ø – 100, 89, 32 мм, L – 679 м, на полиэтиленовые трубы Ø – 150 мм, L – 620 м и стальные трубы L – 59 м	620	м	106	257	257	Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов	
			59	м	10	24,5	24,5		
2	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100 мм, L – 286 м	Замена стальных сетей водоснабжения Ø –100 мм, по ул. Садовой L – 114 м и по ул. Совхозной L – 172 м, на полиэтиленовые Ø –100 мм, L – 286 м 	286	м	69	105	112	Необходимость замены изношенных сетей водоснабжения (снижение доли сетей, нуждающихся в замене), снижение износа сетей водоснабжения и повышение надежности системы водоснабжения, исключение застоев воды в сетях водоснабжения, обеспечение технической возможности подключения новых абонентов	
3	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м 	Замена стальных сетей канализации Ø – 300 мм, L – 1664 м на полиэтиленовые Ø – 300 мм, L – 1664 м; замена стальных труб Ø – 325 мм, L – 36 м на стальные трубы Ø – 325 мм, L – 36 м	1664	м	577	309	778	Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения села Небуг, снижения износа сетей и повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов	
			36	м	12	7	17		
4	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	Замена стальных сетей канализации Ø – 300 мм, L – 1664 м, на полиэтиленовые Ø – 300 мм, L – 1664 м; замена стальных труб Ø – 325 мм, L – 36 м на стальные трубы Ø – 325 мм, L – 36 м	1664	м	577	309	778	Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях обеспечения безаварийной работы системы водоотведения села Небуг, снижения износа сетей и повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов	
			36	м	12	7	17		
5	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома № 3 по ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325 мм, L – 35 м	Замена керамических сетей канализации Ø – 250 мм, L – 35 м, на полиэтиленовые Ø – 325 мм, L – 35 м	35	м	35			Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях увеличения пропускной способности существующих коллекторов, снижения износа сетей и повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов	
6	Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский, Ø – 200 мм, L – 14 м	Замена керамических сетей канализации Ø – 150 мм, L – 14 м, на полиэтиленовые Ø – 200 мм, L – 14 м	14	м	14			Необходимость замены изношенных сетей канализации в целях увеличения пропускной способности существующих коллекторов, снижения износа сетей и повышения надежности системы канализации, обеспечения технической возможности подключения новых абонентов	

Основные технические характеристики мероприятий до и после реализации мероприятий
Таблица 3
№	Наименование мероприятий (включающее их краткое описание и место расположения объектов, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов)	Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) 	Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия	Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия	
					
1	2	3	4	5	
1	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 мм	Протяженность, м	620+118	620 +59	
		Диаметр, мм	100; 89; 32 	150	
		Глубина заложения, грунт 3 группы, сухой, м	 	0,7(0,55+0,15)	
		Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим его восстановлением, м	 	620	
		Устройство железобетонных колодцев с установкой гребенок для абонентских врезок, шт. 	 	14	
		Абонентские врезки с установкой вентилей, шт.	 	42	
2	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100 мм, L – 286 м	Протяженность, м	286	286	
		Диаметр, мм 	100 (сталь)	100	
		Глубина заложения, грунт 3 группы, сухой,		0,7	
		Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим его восстановлением, м	 	168	
		Устройство железобетонных колодцев с установкой гребенок для абонентских врезок, шт. 	 	7	
		Устройство железобетонного колодца с установкой пожарного гидранта, шт. 	 	1	
		Абонентские врезки с установкой вентилей, шт.	 	42	
3	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	Протяженность, м	1664	1664	
		Диаметр, мм	300 (сталь)	300	
		глубина заложения, грунт 3 группы, мокрый, м		0,8	
4	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	Протяженность, м.	1664	1664	
		Диаметр, мм.	300 (сталь)	300	
		Глубина заложения, грунт 3 группы, мокрый, м	0,8	0,8	
5	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома № 3 по ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325 мм, L – 35 м	Протяженность, м.	35	35	
		Диаметр, мм.	250 (керамика)	325	
		Глубина заложения, грунт 3 группы, мокрый, м	2,2	2,2	
		Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим его восстановлением, м	 	35	
6	Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский, Ø – 200 мм, L – 14 м	Протяженность, м	14	14	
		Диаметр, мм	150(керамика)	200	
		Глубина заложения, грунт 3 группы, мокрый, м	4,3	4,3	
		Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим его восстановлением, м	 	14	

3. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
 Таблица 4
Наименование показателя	Фактическое значение	Плановые значения	
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации ИП, %	63,39	67,03	67,24	63,82	
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии ИП, %	63,39	67,03	70,26	73,06	
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при реализации ИП, %	71,84	74,75	28,76	23,36	
Процент износа объектов централизованных систем водоотведения при отсутствии ИП, %	71,84	74,75	77,25	79,17	
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию 
Таблица 5
Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия	Окончание реализации мероприятия	Ввод в эксплуатацию 	
Водоснабжение	
Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 мм	2018	2020	4 квартал 2020	
Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100 мм, L – 286 м	2018	2020	4 квартал 2020	
Водоотведение	
Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	2018	2020	4 квартал 2020	
Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, протяженностью 36 м	2018	2020	4 квартал 2020	
Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома № 3, ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325 мм, L – 35 м	2018	2018	4 квартал 2018	
Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский, Ø – 200 мм, L – 14 м	2018	2018	4 квартал 2018	

5. Расчет финансовых потребностей МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» на реализацию мероприятий ИП по реконструкции водопроводных сооружений производился с учетом следующих факторов:
локальные сметные расчеты разрабатывались в федеральных единичных расценках с учетом коэффициентов 4 квартала 2016 года;
прайс-листы, расценки и коммерческие предложения от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене).
В инвестиционной программе учтены все суммы без НДС.
Для перевода сметной стоимости в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования использовались коэффициенты-дефляторы, утвержденные в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 – 2020 гг., утвержденном в октябре 2017 года, по строке «Инвестиции в основной капитал» и в долгосрочном прогнозе Минэкономразвития Российской Федерации на период до 2030 года: 2017 год -104,4%, 2018 год – 104,6%, 2019 год – 104,4%, 2020 год – 104,2%. 
Расчет финансовых потребностей инвестиционной программы производился в несколько этапов:
1 этап – расчет сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года;
2 этап – перевод сметной стоимости мероприятий в ценах 2016 года в цены, соответствующие периоду инвестирования.
Результаты первого этапа – расчет сметной стоимости представлены в таблице 6. Сметная стоимость мероприятий ИП составит: по водоснабжению – 2665,04 тыс. руб.; по водоотведению – 15324,20 тыс. руб.
Результаты второго этапа – перевод сметной стоимости мероприятий в цены, соответствующие периоду инвестирования, представлены в таблице 7.
С учетом коэффициентов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации, стоимость мероприятий ИП составит: по водоснабжению – 3066,62 тыс. руб.; по водоотведению – 17533,32 тыс. руб.

Сметная стоимость мероприятий инвестиционной программы в ценах 2016 года
	
 Таблица 6
	№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам в натуральных величинах	
			2018	2019	2020	
1	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 мм	2056,98	351,68	852,65	852,65	
2	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100 мм, L – 286 м	608,06	146,70	223,24	238,12	
3	Итого по водоснабжению	2665,04	498,38	1075,89	1090,77	
4	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	7428,58	2576,03	1379,43	3473,12	
5	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, протяженностью 36 м	7428,58	2576,03	1379,43	3473,12	
6	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома № 3, ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325 мм, L – 35 м	205,77	205,77	0,00	0,00	
7	Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский, Ø – 200 мм, L – 14 м	261,27	261,27	0,00	0,00	
8	Итого по водоотведению	15324,20	5619,10	2758,86	6946,24	
9	Всего по ИП	17989,24	6117,48	3834,75	8037,01	

Сметная стоимость инвестиционной программы в ценах, соответствующих периоду реализации мероприятий
Таблица 7
№	Наименование мероприятия	Финансовые потребности всего, тыс. руб.	Реализация мероприятий по годам, тыс. руб.	
			2018	2019	2020	
Инвестиционный проект по подключению абонентов	
1	Реконструкция сети водоснабжения село Небуг, ул. Набережная, Ø – 150 мм, L – 620 мм	2369,03	384,04	972,08	1012,91	
2	Реконструкция сети водоснабжения, село Небуг, ул. Садовая, ул. Совхозная, Ø -100 мм, L – 286 м	697,59	160,2	254,51	282,88	
3	Итого по водоснабжению	3066,62	544,24	1226,59	1295,79	
4	Сумма налога на прибыль	766,66	136,06	306,65	323,95	
5	Итого по водоснабжению с учетом налога на прибыль	3833,28	680,30	1533,24	1619,74	
6	Реконструкция 1-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька», Ø – 300 мм, L – 1664 м (полиэтилен); Ø – 325 мм, L – 36 м	8511,65	2813,09	1572,65	4125,91	
7	Реконструкция 2-ой линии напорного канализационного коллектора от отеля «Сорренто» до колодца гасителя на территории санатория «Зорька» Ø – 300мм, L – 1664м (полиэтилен); Ø – 325 мм, протяжённостью 36 м	8511,65	2813,09	1572,65	4125,91	
8	Реконструкция канализационных сетей в районе жилого дома №3, ул. Газовиков, село Небуг, Ø – 325 мм, L – 35 м	224,71	224,71	0	0	
9	Реконструкция сетей канализации в районе дома № 6, пос. Тюменский село Небуг, Ø – 200 мм, L – 14 м	285,31	285,31	0	0	
10	Итого по водоотведению	17533,32	6136,2	3145,3	8251,82	
11	Сумма налога на прибыль	4383,33	1534,04	786,33	2062,96	
12	Итого по водоотведению с учетом налога на прибыль	21916,65	7670,25	3931,63	10314,78	
13	Всего по ИП с учетом налога на прибыль	25749,93	8350,54	5464,87	11934,52	

Источники финансирования ИП

Общая сумма финансовых потребностей ИП МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» на 2018-2020 гг. составит 25749,93 тыс. руб., в том числе:
1) водоснабжение: 
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 3833,28 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 766,66 тыс. руб.; 
2) водоотведение:
за счет платы за подключение (средства, поступающие от тарифа на подключение в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку) – 21916,65 тыс. руб., в том числе налог на прибыль 4383,33 тыс. руб. 
6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Реализация инвестиционной программы направлена на обеспечение возможности подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, мероприятия программы финансируются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение (технологическое присоединение), в связи с чем расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы не приводится.

7. Программа в области энергосбережения и энергетической эффективности
В таблице 8 приведена программа в области энергосбережения и энергетической эффективности на 2016-2020 гг.
Таблица 8
Основание для разработки программы	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	
Почтовый адрес	352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, 7	
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)	Коротунов А.А., тел. (86167) 98-457, e-mail: nebyg-kh@yandex.ru	
Даты начала и окончания действия программы	01.01.2018 – 31.12.2020	
Год	Затраты на реализацию программы, 
млн, руб. 
без НДС	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)	
			При осуществлении регулируемого вида деятельности	При осуществлении прочей деятельности,
в том числе хозяйственные нужды	
			Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР в результате реализации программы	Суммарные затраты ТЭР	Экономия ТЭР реализации программы	
	всего	в том числе капитальные		т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	т у.т. без учета воды	млн. руб. без НДС с учетом воды	
базовый год – 2016	0	0	0	3037,6		0	0	Прочей хозяйственной деятельности, кроме регулируемых видов деятельности, предприятие не ведет
	
2018	0,042	0	0	3037,6		0	0		
2019	0,079	0	0	3037,6		0	0		
2020	0,044	0	0	3037,6		0	0		
ВСЕГО	0,165	0	0	12150,4		0	0		
Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2018-2020 гг. 
Таблица 9
№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	Базовый год – 2016	2018	2019	2020	
1	Целевые показатели	 	 	 	 	 	 	 	
1.1	Доля объектов, в отношении которых проведено энергообследование	%	нет сведений	нет сведений	100	100	100	100	
1.2	Доля обученных ответственных за энергосбережение	%			100	100	100	100	
1.3	Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета 	%			100	100	100	100	
1.4	Доля использования осветительных устройств с использованием энергосберегающих ламп (за исключением осветительных устройств с использованием светодиодов) в общем объеме используемых осветительных устройств	%			50	70	50	25	
1.5	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%			 – 	30	50	75	
1.6	Доля многоквартирных домов, жилых домов, дачных домов или садовых домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета воды в общем количестве таких домов, в которые осуществляется поставка соответствующего энергетического ресурса, за исключением ветхих, аварийных объектов	№			100	100	100	100	

Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2018-2020 гг. 
Таблица 10
№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы	Показатели экономической эффективности	Срок амортизации, лет	Затраты (план), тыс. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы	Статья затрат	Источник финансирования	
		единица измерения	всего	2018 год	2019 год	2020 год	единица измерения	всего по годам экономия в указанной размеренности	2018 год	2019 год	2020 год						
									численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в тут.	численное значение экономии тыс. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в т.е.	численное значение экономии тыс. руб.	численное значение экономии в указанной размеренности	численное значение экономии в тут.	численное значение экономии тыс. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	ВНД, %	ЧДД, млн. руб.		2018 год	2019 год 	2020 год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Водоснабжение																										
1	Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения, включая осветительные устройства с использованием светодиодов	шт.	90	30	30	30	тыс. кВт/ч	21	7	         -	41	7	-	43	7	-	45	-	-	-	1	7,5	7,5	7,5	Прибыль	Средства предприятия	
	Водоотведение																										
2	Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения, включая осветительные устройства с использованием светодиодов	шт.	120	40	40	40	тыс. кВт/ч	30	10	         -	60	10	-	63	10	-	66	-	-	-	1	10	10	10	Прибыль 	Средства предприятия	

8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации ИП.
В таблице 11 приведен расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по холодному водоснабжению.
Таблица 11
№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	Всего	
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	544,24	1226,59	1295,79	3066,62	
2	Налогооблагаемая база, тыс. руб.	680,30	1533,24	1619,74	3833,28	
3	Ставка налога на прибыль, %	20,00	20,00	20,00	20,00	
4	Сумма налога на прибыль, тыс. руб.	136,06	306,65	323,95	766,66	
В таблице 12 приведен расчет налога на прибыль организаций, дополнительно возникающего в связи с реализацией ИП по водоотведению.
Таблица 12
№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	Всего	
1	Расходы на проведение мероприятий по подключению, тыс. руб.	6136,20	3145,30	8251,82	17533,32	
2	Налогооблагаемая база, тыс.  руб.	7670,24	3931,63	10314,78	21916,65	
3	Ставка налога на прибыль, %	20,00	20,00	20,00	20,00	
4	Сумма налога на прибыль, тыс. руб.	1534,04	786,33	2062,96	4383,33	
В таблице 13 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/ сут.). 
Таблица 13
№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	Всего	
1	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	680,30	1533,24	1619,74	3833,28	
2	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	161,58	73,06	130,48	365,12	
3	Тариф на подключение – ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут.	10498,69	
В таблице 14 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения (в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, не превышающую 250 м3/ сут.). 

Таблица 14
№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год	Всего	
1	ИТОГО финансовые потребности инвестиционной программы, тыс. руб.	7670,25	3931,63	10314,78	21916,65	
2	Объем подключаемой нагрузки, м3/сут	151,68	56,74	268,00	476,42	
3	Тариф на подключение – ставка за подключаемую нагрузку, руб./м3/сут	46002,79	
В таблице 15 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения (ставка тарифа за протяженность сети водоснабжения) на 2018-2020 гг.
Таблица 15
Диаметр (Ø), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей – закрытый	
			тип грунта (g)	
			сухой	
			Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство), руб./м3	
			2018 год	2019 год	2020 год	
20	2	Полиэтилен	2312,33	2404,82	2480,57	
25	2	Полиэтилен	2320,64	2413,46	2489,49	
32	2	Полиэтилен	2335,50	2428,92	2505,43	
40	2	Полиэтилен	2362,09	2456,57	2533,95	
50	2	Полиэтилен	2393,63	2489,37	2567,79	
63	2	Полиэтилен	2456,09	2554,33	2634,79	
75	2	Полиэтилен	2569,49	2672,27	2756,44	
90	2	Полиэтилен	2629,71	2734,90	2821,05	
100	2	Полиэтилен	3071,75	3194,62	3295,25	
150	2	Полиэтилен	3606,52	3750,79	3868,93	
В таблице 13 приведен предварительный расчет тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованным водоотведения (ставка тарифа за протяженность сети водоотведения) на 2018-2020 гг.
Таблица 16
Диаметр (Ø), мм	Глубина залегания (w), м	Материал (t)	Тип прокладки сетей – закрытый	
			тип грунта (g)	
			сухой	
			Ставка тарифа за протяженность сети (расходы на проектирование и строительство), руб./м3	
			2018 год	2019 год	2020 год	
160	2	Полиэтилен	2629,44	2734,62	2820,76	
200	2	Полиэтилен	2763,87	2874,43	2964,97	

9. Отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП
ИП МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Небугского сельского поселения» утверждается впервые, в связи с чем, отчет об исполнении ИП за последний истекший год периода реализации ИП не приводится.